정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	오동소하천 정비사업
② 추진배경	○ 주택 침수 및 재해위험이 상존하는 오동소하천을 재해복구 사업 및 자연재해위험 개선지구 정비사업 병행 추진으로 자연재해 사전 예방
③ 사업개요	○ 위 치 : 장성읍 영천리 일원(호남고속도로~방울샘 상류) ○ 사업개요 : 하천정비 L=1.49km - 재해복구사업 : 하천정비 L=0.67km(주거지역) - 자연재해위험 개선지구 정비사업 : 하천정비 L=0.82km ○ 사 업 비 : 371억원(국비 244, 군비 127) ○ 사업기간 : 2021. 7. ~ 2023. 12.
④ 사업부서	안전건설과		⑤ 담당자	시설 7급 김정윤
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2021년~2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 재해복구사업 대상지 확정		`20.09.	김선주 안전건설과장 박금석 하천재난팀장 김태근 주무관
○ 재해복구사업 기본 및 실시설계 용역 시행		`21.01.	김선주 안전건설과장 이행재 하천재난팀장 김태근 주무관
○ 재해복구사업 착공 및 토지보상 병행 추진		`21.07.	김선주 안전건설과장 이행재 하천재난팀장 김태근 주무관
○ 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역 시행		`21.07.	김선주 안전건설과장 이행재 하천재난팀장 김태근 주무관
○ 자연재해위험개선지구 대상지 선정(행정안전부)		`21.09.	김선주 안전건설과장 이행재 하천재난팀장 김태근 주무관
○ 국도 도로관리심의회 심의, 도로점용허가(익산청)		`22.03.	이인섭 안전건설과장 김태근 하천재난팀장 김정윤 주무관
○ 설계 경제성 및 안정성 검토, 소규모환경영향평가 등		`22.05.	이인섭 안전건설과장 김태근 하천재난팀장 김정윤 주무관
○ 한국도로공사 설계심의 및 행정안전부 사전설계검토 완료		`22.06.	이인섭 안전건설과장 김태근 하천재난팀장 김정윤 주무관