정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	파크골프장 조성
② 추진배경	□ 기산리 파크골프장이 공설운동장 건립 부지에 포함됨에 따라 새로운 파크골프장 건립 필요 고령층의 건강 및 여가활동 증진을 위한 체육시설 수요 증가
③ 사업개요	□ 위 치 : 황룡면 월평리 590-1 외 14필지 □ 사업규모 : 파크골프장(9홀) 1개소 ※ A=9978.4㎡ □ 사 업 비 : 510백만원(국비 152 / 군비 358)
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담당자		행정8급 이동규
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2020. 11. ~ 2021. 5.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 용역 착수		‘18.10.23.		강대익 문화관광과장 직무대리 조우일 관광진흥팀장 양동욱 주무관
○ 파크골프장 대상지 확정 및 사업비 7억 1회 추경 편성 (본예산 3억)		‘19.04.02.		이기현 문화관광과장 정일영 체육팀장 양동욱 주무관
○ 소규모환경영향평가		‘19.05.~11.		이기현 문화관광과장 정일영 체육팀장 양동욱 주무관
○ 소규모환경영향평가 결과 회신 (부동의)		‘19.12.18.		이기현 문화관광과장 정일영 체육팀장 양동욱 주무관
○ 실시설계 완료		‘19.12.20.		이기현 문화관광과장 정일영 체육팀장 양동욱 주무관
○ 소규모환경영향평가 관련 영산강 환경청 협의		‘20.01.~04.		이기현 문화관광과장 최승호 체육팀장 양동욱 주무관
○ 실시설계 변경(18홀→9홀) 및 하천점용허가 협의(안전건설과)		‘20.08.~10.		고학주 문화관광과장 강대영 체육팀장 이동규 주무관
○ 파크골프장 조성공사 계약 및 착공		‘20. 12.		고학주 문화관광과장 강대영 체육팀장 이동규 주무관
○ 임시파크골프장 원상복구		‘21. 3.		최규원 문화관광과장 강대영 체육팀장 이동규 주무관