정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	세계유산 필암서원 선비문화 육성사업
② 추진배경	유네스코 세계유산인 필암서원을 세계적인 관광자원으로 발전시키고 축령산, 황룡강 등 지역 고유자원과 연계하는 체류형 관광콘텐츠 개발로 관광 활성화 도모 ※ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 공모 선정
③ 사업개요	○ 위 치 : 황룡면 필암서원 일원 ○ 사 업 비 : 10,081백만원(도비 5,000 / 군비 5,081) ○ 사업내용 - H/W사업 : 집성관 및 전시관 내부 리모델링, 전통정원조성, 필암서원 주변 정비 등 - S/W사업 : 기본 및 세부시행 계획 수립, 선비문화 아카이브 구축, 선비문화 콘텐츠 프로그램 개발 및 운영, 사업홍보 등
④ 사업부서	문화관광과		⑤ 담당자		학예연구사 장성일
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간		2021 ~ 2024
<그간 주요 추진내용>
○ 정원 주변정비사업 기본계획 및 실시설계		‘23.03.~08.		고재인 문화관광과장 고은경 문화예술팀장 장성일 주무관
○ 유물전시관 기본계획 용역		‘23.03.~05.		고재인 문화관광과장 고은경 문화예술팀장 장성일 주무관
○ 집성관 리모델링 구조안정성 검토		‘22.12.~‘23.05.		고재인 문화관광과장 고은경 문화예술팀장 장성일 주무관
○ 집성관 리모델링 실시설계		‘22.07.~‘23.06.		고재인 문화관광과장 고은경 문화예술팀장 장성일 주무관
○ 기본계획 승인		‘22.10.		고재인 문화관광과장 김성남 문화예술팀장 서승우 주무관
○ 전통정원조성 실시설계 용역		‘22.04.~08.		최규원 문화관광과장 최정순 문화예술팀장 백은솔 주무관
○ 집성관 내부 리모델링 건축기획업무 용역 및 공공건축심의위원회 심의		‘22.04.~05.		최규원 문화관광과장 최정순 문화예술팀장 백은솔 주무관

○ 기본 및 세부시행 계획 수립 용역 - 전문가 자문회의, 필암서원 및 지역주민 보고회	‘21.09.~‘22.04.	최규원 문화관광과장 최정순 문화예술팀장 서승우 주무관
○ 필암서원 관계자 및 지역주민 사업 설명회	‘21.03.	최규원 문화관광과장 류현성 문화예술팀장 서승우 주무관
○ 지방재정 투자심사 완료	‘20.11.	이상옥 기획실장 유승화 지역계획팀장 김신애 주무관
○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 공모 선정	‘20.08.	이상옥 기획실장 유승화 지역계획팀장 김신애 주무관